문서번호	건축부-8135
결재일자	2014.7.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	07/03 이병석
협 조

「시립노원시각장애인복지관 재건축공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계내역 조정 및 추가반영 -

2014. 07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립노원시각장애인복지관 재건축공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계내역 조정 및 추가반영 -

『시립노원시각 장애인 복지관 재건축공사』 감리자로부터 현장 적용에 따른 설계내역 조정 및 추가반영 요청에 대한 실정보고를 검토 보고함

□ 공사개요

○ 위    치 : 노원구 상계동 771번지

○ 건립규모 : 지하1/지상4층, 연면적 2,752.84㎡

○ 공사기간 : '13. 01. 02 ～'14. 08. 31

○ 건축공사도급액 : 2,982백만원

○ 시 공 사 : 천마산건설(주), ○ 감 리 사 : (주)전인씨엠건축사

○ 현 공 정 : 내외부 마감 공사 중(공정율 87%)

□ 추진경위

○ 2012.02.12 : 『시립노원시각장애인 복지관』계획수립

○ 2013.01.02 :  공사착수

○ 2014.07.01 : 감리원 실정보고 제출

□ 실정보고 내용

○ 관급자재 사급전환(시멘트, 레미콘)

- 층고(2,3,4층) 변경 및 지하층, 지붕층 장비패드용 물량 증가

- 건물 배면부 포장 지반보강

○ 설계서 내역조정 및 추가 반영 등

- 내부 전체 철재 칸막이 물량 증가 등

- 복층유리 알곤가스 주입 등

○ 부출입구 진입로폭 및 동선 변경

○ 관급자재 전환 및 설계서 내역조정(추가반영) 요청 공사비 증감검토    (낙찰율 적용후)

공 종	품 명	금 액(단위:원)(직접비 적용)			비 고
		변경전(원)	변경후(원)	증 감(원)
건축공사	시 멘 트(40KG)	-	632,400	632,400	관급자재 사급전환
	레미콘 (25-24-15)	-	3,717,126	3,717,126
	전체철재 칸막이	12,701,936	14,001,441	1,299,505	설계내역 조정 및 추가 반영
	반유리 칸막이	6,740,622	12,411,584	5,670,962
	배선철재 칸막이	1,780,636	2,104,388	323,752
	상부철재편개문틀(SST)	3,497,296	4,133,168	635,872
	쪽유리 문짝(편개)	3,113,451	3,679,533	566,082
	손잡이	823,922	973,726	149,804
	투명유리	4,414,444	1,649,232	-2,765,212
	카스토퍼	1,339,424	2,608,352	1,268,928
	라인마킹	229,502	850,126	620,624
	커튼월 백판넬	4,355,400	5,571,489	1,216,089
	복층유리 알곤가스주입	-	5,020,376	5,020,376	설계개선사항 내역반영
	비닐무석면타일붙임	174,348	-	-174,348
	석재타일붙임	-	492,262	492,262
	소 계	39,170,981	57,845,203	18,674,222
토목공사	레미콘 (25-21-12)	-	9,644,930	9,644,930	관급자재 사급전환
	맨홀 PE사다리설치	-	205,110	205,110	유지관리용이
	소 계	0	9,850,040	9,850,040
합 계		39,170,981	67,695,243	28,524,262

□ 감리단 검토 의견

○ 관급자재인 시멘트, 레미콘의 사급전환 요청 검토 및 설계내역 조정       (추가반영) 요청에 대하여 검토한 결과, 타당하다 판단되어 실정 보고

○ 부출입구 진입동선은 공사비 증감없이 이용자 편의를 위해 변경

□ 처리의견

○ 시공감리원의 실정보고에 대해 승인 처리코저함.(단 주차장에 설치하는 카스토퍼는 주차면당 1개설치 검토·반영)

○ 승인 사항은 우선 현장에 반영·시공토록하고 추후 설계변경 처리코자 함.

붙 임 : 감리검토 의견서 1부.  끝.