투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(한강공원 나들목 증설공사-낙천정)-총차 2회

우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(낙천정)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 총차 2회 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(낙천정)

나. 계약기간 : 2014. 2.20 ∼ 2015. 2.21

다. 계약금액 : ￦5,342,940,000원

라. 시 공 사 : ㈜승일토건,기천건설㈜

마. 감 리 사 : ㈜케이알티씨, ㈜서영엔지니어링

바. 변경금액

구 분	총차사업			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
총공사비	5,774,418,730	5,836,578,730	증) 92,160,000
도급비	5,342,940,000	5,435,100,000	증) 92,160,000
관급자재비	386,266,000	386,266,000	-
이전비	15,212,730	15,212,730	-

사. 설계변경사유

- 감리단 현안사항 검토에 의한 실정보고 반영

공 종	변 경 내 용	공 사 비		비 고
구조물공사 도로시설공사 부대공사	- 현장 현황 보고 반영(지하지장물 깨기 외) : 접속슬래브 깨기(D.W.S) 반영 (증 13㎡) : 지반보강공(S.G.R) 제외 (감 299m)	감)	220
	- 기존나들목 마감 연장 조정 : 노출콘크리트위 투명 코팅 633㎡→26㎡ (감 607㎡)	감)	98,450
	- 방수공법 변경 : 점착복합방수→개량아스팔트시트방수 : 유도배수로 위치 및 설치 폭 변경		-
	- 지장물(옹벽 기초) 간섭에 따른 강관추진 연장 조정 : 강관추진공 1,181m→1,162m (감 19m)	감)	38,280
	- 기존 방음벽 철거 및 재설치 시공 방안 변경 : 가시설 엄지말뚝을 이용한 방음벽 기초 보강	증)	132,550
	- 설계도서 검토 반영 : 설계도서 누락 및 오류 내역 반영	증)	96,560
계		증)	92,160

아. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

첨부 : 1. 실정 보고서 1부

2. 설계변경 사유서 1부

3. 설계변경 도서 1부. 끝.

주무관	김동식		치수과장	김용제		시설부장	07/03 차광재
협조자	주무관	최승룡		주무관	장보금		총무과장	최대봉
시행	치수과-2560	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개