문서번호	도시철도계획부-2788
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계획과장	도시철도계획부장
정원영		김진팔	07/03 박상돈
협조
	주무관		한승균

「하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계」 추진 관련

설계개선 총괄검토팀 운영계획

2014. 7

도시철도계획부

「하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 추진 관련」

설계개선 총괄검토팀 운영계획

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계의 내실화를 기하고 이용시민의 안전과 편의를 최우선으로 하는 설계성과를 작성하기 위해 설계개선 총괄검토팀을 운영코자 함.

Ⅰ				추진배경

◦ 하남선(5호선연장) 건설공사를 입찰과정의 투명성 확보를 위한 기타공사로 추진함에 따라, 공사중 설계변경을 최소화하기 위하여 내실있는 설계검토가 필요함.

◦ 그간 지하철 건설공사 시행중 및 노선 운영중 제시된 개선사항을 설계향상 방안으로 설계단계에 피드백하여 경제적이며 효율적인 설계추진

Ⅱ				설계용역 개요

◦ 사 업 명 : 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계용역

◦ 위    치 : 강동구 상일역 ~ 서울시 시계(시스템분야 하남시 포함)

◦ 사업규모 : 정거장 1개소, 본선 1.116km, 삼각선 1.331km

◦ 용역기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 7. 30(서울시계구간 2014.10.31.)

◦ 용 역 비 : 6,434백만원

◦ 용 역 사 : ㈜ 신성엔지니어링외 7개사

◦ 설계감리용역사 : ㈜ 동명기술공단 건축사사무소 외 4개사

Ⅲ				구성 및 운영계획(안)

◦ 구 성

- 팀 장 : 계획과장

- 팀 원

․ 분야별 업무담당(도철계획부, 도철건축부, 도철설비부)

․ 설계감리/설계 용역 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자

▸ 토목분야 : 철도, 토목구조, 토질 및 기초 각 1명

▸ 기타분야 : 건축, 기계설비, 전기, 소방 각 1명

※ 분야별 설계기술자 및 설계감리 참여

◦ 기    간 : 2014. 7 ~ 2014. 10. 31

◦ 수행업무

- 공사중 또는 운영중인 노선의 개선사항을 설계에 피드백

- 설계안전성 및 품질향상 방안 검토

- 설계단계에서 시공계획서 및 시공상세도 작성 방안 검토(해외사례조사 분석 포함)

- 분야별 자문회의 및 건설기술심의 지적사항 반영여부 확인

- 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 누락, 오류사항 등 검토

◦ 일정계획

구 분	7월						8월				9월						10월
	1주	2주	3주		4주		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	5주		1주		2주		3주	4주
기본 및 실시설계 추진	선형,공법선정 대표단면 구조계산						터널,가시설,구조물 설계								심의지적사항 보완
자문회의
	공법등 자문						최종 자문
설계개선 검토회의
			1차검토					2차검토
건설기술심의
											심의 요청								심의보완 보고
총괄검토팀 운영
	자문결과 내용검토								자문보완검토							심의보완 도서검토				설계개선 성과결과 정리 및 보고

Ⅳ				운영방법

◦ 주간 총괄검토회의(매주 금요일)

- 주   관  : 계획과장

- 장   소  : 남산별관 지하1층 공용회의실 또는 설계합동사무실

- 참석대상

․ 분야별 업무담당(도철계획부, 도철건축부, 도철설비부)

․ 설계감리/설계 용역 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자

▸ 토목분야 : 철도, 토목구조, 토질 및 기초 각 1명

▸ 기타분야 : 건축, 기계설비, 전기, 소방 각 1명

- 보고내용 : 주간 검토결과 실적 및 내주계획을 각 분야별로 보고

◦ 운영처리 흐름도

【검 토】 분야별 설계개선사항, 기본․ 실시설계시 누락사항, 자문회의 및 기술심의시 지적사항 조치계획 등 적정성검토, *팀장 및 팀원*	⇒	【조 정】 설계개선사항 확인조정 유사한 공종에 대한 적용공법 조정 등 *검토팀장 주관*	⇒	【검토회의】 설계개선사항 적용, 실시설계 반영 내용 확인 및 적정성 등 검토 *도시철도계획부*

Ⅴ				향후계획

◦ 실시설계완료후 설계개선사례 백서 발간하여 유관부서 및 타 지방자치단체 등에 전파

Ⅵ				행정사항

◦ 설계감리/설계 용역 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자가 총괄검토회의에 참여토록 업무지시(도시철도계획부)

◦ 총괄검토팀 운영기간중 건축, 기계설비, 전기, 소방설비 분야별 설계감리/ 설계용역사 검토내용을 각부 업무담당이 확인하여 지적사항 및 개선사항을 계획부에 통보(도시철도건축부, 도시철도설비부). 끝.