출 장 결 과 보 고 서

시설관리과장		소장			결재
이시우		07/03 정운진
협 조

	명에 의하여 동대문구 관내 우기대비 공사현장 안전점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 3
보 고 자 : 직 지방시설사무관 성명 : 이시우

보 고 내 용
일 시	2014. 7. 3. (목) 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장개요 ○ 답십리초교 주변외 1개소 세척갱생관 정비공사 - 공사개요 : D=20~400mm, L=1332m - 추진실적 : 공정 95% 잔여공정 D=400mm 연결작업 ○ 제기동 1157번지외 5개소 세척갱생관 정비공사 - 공사개요 : D=20~300mm, L=1485m - 추진실적 : 공정 78%, 완료구간 L=1160m ○ 장안삼거리~장안동316간 배수관 정비공사 - 공사개요 : D=100~600mm, L=495m - 추진실적 : 공정 63%, 완료구간 L=312m ○ 용두동 791번지 배수관 정비공사 - 공사개요 : D=500mm, L=300m - 추진실적 : 공정 100% □ 점검결과 ○ 4개 현장 공사 완료구간 모두 도로포장공사가 완료되었고, 추가 침하발생 없이 주민통행 및 차량통행에 이상없이 안전사고의 우려가 없음 □ 향후계획 ○ 우천후 집중점검하여 침하등 안전사고 방지하고자 함. 끝.
비 고