문서번호	도로보수과-3076
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		국중진	07/03 정진오
협조

설계변경 검토보고(1회)

【2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

성동도로사업소

(도로보수과)

·

설계변경 검토보고(제1회)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 포장도로굴착복구공사(연간단가)』시행 중 당초 공종별 계약 물량 증·감 및 배수성포장 신규공종 발생 등으로 설계변경사항을 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한린토건  이현숙

○ 도  급  비 : 595,004,190원

○ 공사개요

- 소규모포장(10㎡)기준    : 48a

- 아스콘포장(t=5cm, 기계) : 332a

□ 변경 사유

○ 당초 2014년 굴착복구 공사는 추정 물량으로 발주하여 시행하여 왔으나,

각구청 복구의뢰 물량에 따라 공종별 시공물량 증․감에 따른 변경

○ 신규공종 추가

- 답십리로 하수관정비공사 구간 기존포장이 배수성포장으로 되어 있어         배수성포장복구 신규공종 발생으로 변경

신 규 공 종	규 격	수량(a)	비고
절삭 후 아스팔트(배수성) 덧씌우기	야간(6차로) 투배수성(t=5㎝)	8

□ 설계변경 내역

○ 물량변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
소규모포장복구	10㎡이하	a	4	4	-
	10㎡이상	a	44	48	증)4
	보도블럭포장	a	3	2	감)1
절삭후덧씌우기	5a/일	a	5	8	증)3
	10a/일	a	10	15	증)5
	20a/일	a	140	87	감)53
	50a/일	a	177	142	감)35
	배수성포장	a	0	8	증)8

○ 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	1,501,844,190	1,501,844,190	0
도급비	595,004,190	595,004,190	0
관급비	880,227,700	880,227,700	0
이설비	26,612,300	26,612,300	0

□ 예산과목

○ 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비(401), 시설비(02)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 신규공종(배수성포장) 추가 및 공종별 물량 변경사항에

대하여 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 :1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증결과 1부. 끝.