함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	계약심사 의뢰(활성탄흡착지 환기설비 개선)

1. 암사고도(기)14-345(2014.07.03)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 활성탄흡착지 및 기타 시설동의 환기설비 개선에 따른 계약금액 조정심의를 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◯ 공사개요

- 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

- 도 급 자 : 고려개발(주) 대표이사 김종오

- 사 업 비 : 1,688억원(도급비 633억원)

◯ 계약금액 조정심의 요청사항

- 조정사유 : 활성탄흡착지 환기설비 개선 공정추가 및 기타 시설동 환기                             설비 수량 조정

- 조정금액

‣ 당   초 :  61,127천원

‣ 변   경 : 180,900천원

‣ 증   액 : 119.773천원

붙임 1. 방침서 1부

2. 감리원 실정보고 1부

3. 계약금액 조정심의 요청서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	전준원		기전설비과장	07/03 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4466	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	jeonjunwon@seoul.go.kr	/	대시민공개