문서번호	배수과-4320
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장		급수부장
전동근	박기범		07/03 이상홍
협 조

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 6월 실적 보고

2014. 7. 3(목)   .

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 6월 실적 보고

직결급수 전환불가능 주택 『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』   6월까지 추진 실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 2,069개소

○ 사업기간 : ’14년 1월 ~  ’14년 12월

○ 사 업 비 : 12억원

□ 추진실적

(단위:개소)

구 분				계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거 및 직결 급수 전환	2014년	계획		2,069	118	119	79	57	268	708	534	186
		1월 ~ 6월	목표	1,054	61	60	44	29	136	354	276	94
			실적	1,184	68	67	53	33	171	349	302	141
			달성율 (%)	112.3	111.5	111.7	120.5	113.8	125.7	98.6	109.4	150
	6월	목표		264	15	15	11	7	34	89	69	24
		실적		302	19	10	19	16	28	78	119	13
		달성율 (%)		114.4	126.7	66.7	172.7	228.6	82.4	87.6	172.5	54.2

○ 불가사유별  추진실적

(단위:개소)

사업소	구분	계	수압부족	관노후	관경협소	수요가 반대	비고
계	2014년 계획	2,069	102	229	287	1,451
	실적 (6.31)	1,184	29	72	58	1,025
	달성율 (%)	57.2	28.4	31.4	20.2	70.6
중부	계획	118	1	12	3	102
	실적	68	-	3	2	63
서부	계획	119	3	3	6	107
	실적	67	-	-	1	66
동부	계획	79	-	-	-	79
	실적	53	-	-	-	53
북부	계획	57	8	7	7	35
	실적	33	1	5	3	24
강서	계획	268	3	7	9	249
	실적	171	-	3	5	163
남부	계획	708	21	187	256	244
	실적	349	4	57	44	244
강남	계획	534	45	3	2	484
	실적	292	8	3	2	279
강동	계획	186	21	10	4	151
	실적	141	16	1	1	123

□ 향후계획

○ 2014년 6월까지 추진목표 달성율은 112.3%(목표 1,054개소, 실적 1,184개소)이나, 실적이 부진한 남부수도사업소(98.6%)에 조기목표 달성을 할 수 있도록 독려하여 사업에 만전을 기하고자 함. 끝.