문서번호	건축부-8151
결재일자	2014.7.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	07/03 이병석
협조

『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」의 시공감리원으로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-7995호(‘14.07.01) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정)내용 알림

○ 전인(노원)14-123호(‘14.07.02) : 설계변경 자문(결정)사항 조치결과 보고 제출

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 방진고무 비교견적서 중 서진솔류션의         견적서 누락 등 지적사항에 대한 조치결과 보고서가 시공감리원으로부터 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 조치 내역 : 별첨

3		감리원 검토의견

○ 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사의 설계변경 자문회의 결정사항을 수용,       당초 자문 요청금액에서 3,331,705원을 감액 조치함

○ 공사비 검토결과(직접비)

- 설계변경자문 요청 금액 : 296,356,075원

- 설계변경자문 지적사항 보완 금액 : 293,024,370원

- 증감액 : 감 3,331,705원

4		처리의견

○ 시공감리원의 검토의견과 같이 설계변경 자문(결정)결과 지적사항 조치이행 등

보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계변경토록 감리원       에게 통보하고자 함

첨부 감리검토 보고서류 1부.  끝.