투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(총차 2회) 시행에 따른 변경계약 의뢰

우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(낙천정)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 총차 2회 시행에 따른 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(낙천정)

나. 계약기간 : 2014. 2.20 ∼ 2015. 9.30

다. 계약금액 : ￦5,342,940,000원

라. 시 공 사 : ㈜승일토건,기천건설㈜

마. 감 리 사 : ㈜케이알티씨, ㈜서영엔지니어링

바. 변경금액

구 분	총 차			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
총공사비	5,774,418,730	5,836,578,730	증) 92,160,000
도급비	5,342,940,000	5,435,100,000	증) 92,160,000
관급자재비	386,266,000	386,266,000	-
이전비	15,212,730	15,212,730	-

사. 설계변경사유

- 감리단 현안사항 검토에 의한 실정보고 반영

공 종	변 경 내 용	공 사 비		비 고
구조물공사 도로시설공사 부대공사	- 현장 현황 보고 반영(지하지장물 깨기 외) : 접속슬래브 깨기(D.W.S) 반영 (증 13㎡) : 지반보강공(S.G.R) 제외 (감 299m)	감)	220
	- 기존나들목 마감 연장 조정 : 노출콘크리트위 투명 코팅 633㎡→26㎡ (감 607㎡)	감)	98,450
	- 방수공법 변경 : 점착복합방수→개량아스팔트시트방수 : 유도배수로 위치 및 설치 폭 변경		-
	- 지장물(옹벽 기초) 간섭에 따른 강관추진 연장 조정 : 강관추진공 1,181m→1,162m (감 19m)	감)	38,280
	- 기존 방음벽 철거 및 재설치 시공 방안 변경 : 가시설 엄지말뚝을 이용한 방음벽 기초 보강	증)	132,550
	- 설계도서 검토 반영 : 설계도서 누락 및 오류 내역 반영	증)	96,560
계		증)	92,160

아. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

첨부 : 1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 사유서 1부

3. 설계변경 도서 1부. 끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	07/03 김용제
협조자	주무관	최승룡
시행	치수과-2566	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개