투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	‘백두산호랑이숲 조성공사’ 직접시공계획 및 하도급 변경 제출(조경/건축)

「백두산호랑이숲 조성공사」 관련 도급업체로부터 직접시공계획 및 하도급 변경에 대한 통지가 있어 붙임과 같이 관련서류를 송부합니다.

가. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

나. 계약기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 5. 29(당초 ‘14. 4. 30일까지)

다. 계약금액 : 금2,377,213,000원

라. 도 급 자 : 미래종합조경(주) 주정수 / ㈜신영그린시스 심재홍

마. 변경사항 : 본공사 공기연장에 의한 변경으로 기타사항 변동없음

붙임 : 직접시공계획 및 하도급 변경 관련서류 각1부(별도송부).  끝.

	조경과장
주무관	조진성		조경과장	07/03 代강금완
협조자
시행	조경과-3664	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02)500-7511	/전송	02)500-7993	/	jsjo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)