투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	토목분야 상주감리원 조정배치 승인 통보

1. 영화관리 14-301호(2014.07.03.)와 관련입니다.

2.『돈화문 국악예술당 건립공사』와 관련하여 토목분야 상주감리원 연장 조정배치 요청내용에 대하여 승인하오니 본 사업이 원활히 추진될 수 있도록 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◯ 토목분야 상주감리원 배치기간 조정 내용

구 분	감리원 배치기간		비 고
	조 정 전	조 정 후
토목분야	`14.02.10~`14.07.09	‘14.02.10 ~ ’14.12.15	연장 122일

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)영화키스톤건축사사무소 대표이사 김주열 님,(주)지화엔지니어링 대표이사 임채권 님
주무관	김현지		문화시설과장	정진수		건축부장	07/04 이병석
협조자	주무관	이진원		주무관	이민영
시행	건축부-8177	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37번지) 시청별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개