투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년 관내포장도로굴착복구공사-연간단가)-제1회

우리사업소에서 시행중인 『2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

나. 공사기간 : 2014. 3.28 ~ 2015. 2.28

다. 계약금액 : 595,004,190원

라. 도 급 자 : 한림토건  이현숙

마. 설계변경사유

- 당초 굴착복구공사는 추정물량으로 발주하여 시행하여 왔으나,

각구청 복구의뢰 물량에 따라 공종별 시공물량 증․감에 따른 변경

- 답십리로 기존 배수성포장구간 배수성포장복구로 신규공종 발생에                   따른 변경

바. 설계변경내역

- 물량변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
소규모포장복구	10㎡이하	a	4	4	-
	10㎡이상	a	44	48	증)4
	보도블럭포장	a	3	2	감)1
절삭후덧씌우기	5a/일	a	5	8	증)3
	10a/일	a	10	15	증)5
	20a/일	a	140	87	감)53
	50a/일	a	177	142	감)35
	배수성포장	a	0	8	증)8

- 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	1,501,844,190	1,501,844,190	0
도 급 비	595,004,190	595,004,190	0
관 급 비	880,227,700	880,227,700	0
이 설 비	26,612,300	26,612,300	0

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비                    및 부대비(401), 시설비(02)

붙임 : 1, 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 제비율 검증결과 자료 1부. 끝.

주무관	홍수종		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	07/04 정진오
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-3085	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개