문서번호	토목부-12891
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
박근우		명경출	07/04 노우성
협조
	주무관		이병환

교통안내(안전)시설물 추가설치 검토

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2014. 07

도시기반시설본부

(토   목   부)

교통안내(안전)시설물 추가 설치 검토

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

『서빙고 고가교 및 강변북로연결로개선공사』현장의 교통안내(안전)시설물 추가설치에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 한종(서빙고)제14-170호(2014. 7. 2.) 실정보고

○ 용산경찰서 교통과-1903호(2014. 2. 28.) : 교통안전시설 개선요청

- 업무연락전 SMIH-14-18988호(2014. 3. 3), SMIH-14-29029호(2014. 6. 12)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 보광동  ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

○ 규    모 : 기존고가 철거 · B=16.0m, L=510m

고가설치 · B=6.4m, L=115m · B=10.4m, L=290m

○ 공사기간 : 총차 2011. 01. 06 ~ 2014. 12. 31

3차 : 2013. 01. 28 ~ 2014. 12. 31

○ 총사업비 : 27,300백만원[도급비 : 18,492백만원]

3차 : 40,000백만원

○ 감 리 사 : (주)한국종합기술   ○ 시 공 사 : 주식회사 흥화

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 용산경찰서 요청 사항

① 반포대교 및 강변북로와 연결된 일산방면 U턴 고가교상 대형차량 선회시 운전자의 부주의로 뒷차축이 교가교 충돌사고 빈번히 발생

⇒ 사고방지를 위한 차중량제한 및 우회도로 교통안내판, 시선유도봉 설치

② 한남역삼거리 교차로 → 보광삼거리 방면 차량정체 가중

⇒ 교통흐름 원할토록 보광삼거리 안전지대 삭선 및 차로재구획

○ 민원요청사항

- 반포대교 북단 램프진입부 야간에 안내 표지판 식별 곤란

⇒ 시인성 확보를 위한 LED 교통안내 표지판 설치

○ 교통안내(안전) 시설물 추가설치 수량

위 치	단위	교통안내 (차선변경,우회 등)	차중량 제한	시선 유도봉	합류주의	LED 안내판
U턴고가	개	1	-	35	12	-
반포대교	개	-	5	-	-	-
한남역→서빙고역	개	3	-	-	-	-
서빙고역→한남역	개	9	-	-	-	-
반포대교북단	개	-	-	-	-	3
합 계	개	13	5	35	12	3

○ 차선삭선 : 342m,  차선재도색 : 203m

○ 공사비 증,감 현황

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증‧(-)감	비 고
1. 부 대 공
1.1 안전시설비	-	12,005	12,005	신규단가 : 낙찰율적용
1) 제경비	-	2,329	2,329
공 급 가 액	-	14,334	14,334
2) 부가가치세	-	1,433	1,433
도 급 금 액		15,767	15,767

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 용산경찰서 및 민원의 요청으로 교통불편해소와 차량통행 안전을 위해 반영된 사항으로 감리단으로부터 적정한 것으로 검토되었는 바,

○ 감리의 실정보고에 대해 설계변경토록 조치하고자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.