투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(부) 자문위원회 결과 통보(916공구 코엑스몰 연결통로)

1. 우리 본부에서 시행중인 「서울지하철 9호선 916공구 건설공사」와 관련 929정거장과 코엑스몰 연결출입구 설치 변경관련 우리부(기계, 전기분야) 설계변경 자문위원회(소위원회) 결과를 아래와 같이 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

○ 자문일시 : 2014. 6. 25(수)

○ 자문장소 : 도시철도국 3층 회의실

○ 자문위원회 : 각6명(기계, 전기분야)

- 위원장 1, 외부위원 3, 내부위원 1, 간사 1.

○ 자문결과 : 부결

- 본부는 본 건이 입찰안내서에 기본설계에서 결정된 사항에 대해서는 합리적인 사유없이 실시설계시 임의로 변경할 수 없음이 명시되어 과업범위이나

- 시공사는 확정 실시설계내역서 및 산출서에 본 출입구 포함되지 않았으며 실시설계도면(건축, 전기, 기계설비)에 과업범위 외라고 명시한 사항으로 본 건에 대하여 제3자의 판결 등에 따라 공사비 부담 주체를 판단받는 조건이므로

- 법률담당관 또는 계약심사과 전문변호사의 사전 법률적 검토 후 재심의.   끝.

	도시철도설비부장
수신자	도시철도사업부장,도시철도토목부장,도시철도건축부장
주무관	김현철		시설전기과장	박성우		도시철도설비부장	07/04 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6111	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 서울시청남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7281	/전송	02-772-7308	/	kihc7281@seoul.go.kr	/	대시민공개