함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고에 따른 회신[성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사(6구간)]

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수도공사관리처-10355(2014.07.03)호와 관련하여 귀 공단에서 검토 요청한 『성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사(6구간 작업조건변경)』의 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신하오니 빈틈없이 시행하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 사업소 의견

연번	구 분	보고내용	사업소 의견
1	작업조건변경(6구간 일부)	당초 주간에 공사추진토록 설계되어 있었으나, 차량통제로 인한 교통 혼잡이 야기되는 실정임	당초대로 주간 작업시 상가밀집지역 단수 및 교통혼잡 등으로 인한 민원이 우려되므로 이를 최소화하고자 작업조건을 야간으로 변경하여 시행

끝.

	중부수도사업소장
주무관	서영인		주무관	한상근		시설관리과장	전결 07/04 나태산
협조자
시행	시설관리과-18027	(	2014.7.4.	)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	대시민공개