문서번호	임대주택과-7639
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	장기전세팀장	임대주택과장		주택건축정책관
장병혁	남정현	한병용		07/04 한규상
협 조

- 2014년 영등포 “쪽방 촌”리모델링(수선) 사업 -

제112차 사업추진단 회의결과 보고

주 택 정 책 실

(임대주택과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	재능가능	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	사회적 기업	)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	영등포구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	sh공사	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

- 2014년 영등포 “쪽방 촌”리모델링(수선) 사업 -

제112차 사업추진단 회의결과 보고

Ⅰ

회의개요

▢ 일    시 : 2014. 7. 2(수)

▢ 장    소 : 영등포 쪽방촌 임시주거시설 커뮤니티센타 2층

▢ 참 석 자 : 8명

○ 나범식(㈜아키폴리 건축사), 고동훈(일로건축), 김형옥(영등포쪽방상담소 소장)

강혜경(희망하우징 이사)

○ 영등포구 : 정혜은(사회복지과 주무관), 장은실(주택과 주무관)

○ S     H : 신연철(재생지원팀)

○ 시 공 자 : 이종진((주)세대건설)

Ⅱ

회의결과

▢ 제3차 리모델링(수선)사업 진행사항 보고 (SH공사)

○ 제2단계 사업 입주자(24명) 임시주거시설로 이주 완료(7월2일)

○ 당초 33개 쪽방였으나, 건물주 2명이 리모델링(수선)사업에 대한 동의을 철회 함

건물주	건물번호	건물위치	쪽방	비고
윤여철	No.46	426-27	8개
황원태	No.49	423-36(1)	1개

※ 철회한 건물주는 창호 등 부분 보수만 원하고 있음

○ 제2단계 사업은 7월3일부터 내부철거 공사를 착수하여 8월10일 공사완료 예정이고 제3차 사업 전체공사는 10월말 예정 임

▢ 임시주거시설 관리 및 이주 등 (SH공사)

○ 임시주거시설 구조보강, 용접 등 보수공사 완료 함(공사비 3,630천원)

○ 제2단계 사업 입주에 따른 임시주거시설 소독 완료 (소독비 156천원)

○ 이삿짐이 너무 많고 입주자들이 짐 정리가 않되 어려움이 있으며, 또한 일부 쪽방에서는 장기간 방치된 음식물로 인부들이 고통을 호소하기도 하였음

Ⅲ

사업추진단 결정사항

▢ 리모델링(수선)사업 철회한 건물의 보수 요청에 대하여 차기회의에서 논의

《 사업추진 개요 》

□ 시행방식 : 3단계 구분하여 추진

계	제1단계	제2단계	제3단계
90 쪽방	37쪽방	24쪽방	29쪽방

□ 공사금액(예정) : 총 642,554,000원(VAT 포함)

건축(기계포함)	도배장판	전기공사	통신공사
499,323천원	28,083천원	79,035천원	36,113천원

□ 추진일정

○ 2014.06.26 ~ 07.02  제1단계 입주 및 제2단계 사업대상 이사

○ 2014.07.03 ~ 08.10  제2단계 리모델링(수선) 공사

○ 2014.08.11 ~ 08.20  제2단계 입주 및 제3단계 사업대상 이사

○ 2014.08.21 ~ 10.31  제3단계 리모델링(수선) 공사

○ 2014.11.01 ~ 11.07  제3단계 입주