투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	공사감리용역기간 변경 계약의뢰(서남권글로벌센터개보수공사)

우리본부에서 시행중인 『서남권글로벌센터 개보수공사』의 공사기간 연장에 따라 감리용역계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 서남권글로벌센터개보수공사

나. 계 약 자 : ㈜건축사사무소한엔김건축

다. 계약기간 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	`14.03.07.~`14.07.09.	`14.03.10.~`14.07.24.	증15일

라. 변경사유 : 주관부서(운영자)의 평면변경 요청 등에 따른 공기연장

붙임 계약기간 변경검토 보고서 1부끝.

	건축부장
주무관	유우린		환경시설과장	신명승		건축부장	07/07 이병석
협조자
시행	건축부-8218	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	archi-rin@seoul.go.kr	/	대시민공개