투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 설계변경 시행 및 계약의뢰(서남권글로벌센터개보수공사)

우리본부에서 시행중인 『서남권글로벌센터 개보수공사 건설폐기물처리용역』의 설계변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 서남권글로벌센터개보수공사 건설폐기물처리용역

나. 계 약 자 : ㈜디엘이엔에스 외 2

다. 계약변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역비	금9,308,000원	금18,240,000원	증)8,932,000

라. 변경사유 : 철거물량 증가 (245.933톤 → 481.924톤)

마. 예산과목 : 글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회조성, 외국인 생활지원강화, 외국인 지원시설 설치·운영(시설비)

붙임 1. 설계변경검토 보고서 1부

2. 설게변경요청서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	유우린		환경시설과장	신명승		건축부장	07/07 이병석
협조자
시행	건축부-8249	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	archi-rin@seoul.go.kr	/	대시민공개