문서번호	정수과-1458
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
홍기웅		임건혁	07/07 박기석
협 조

강북, 광암아리수정수센터

사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.   .

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

강북, 광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 “사업장폐기물 처리용역”의 설계변경사항이 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최하고, 그 결과를 보고합니다.

심의회 개최현황

❍ 일   시 : 2014. 7. 4. 10:00

❍ 장   소 : 정수과 사무실

❍ 안   건 : 사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역 설계변경

❍ 심의회 구성

- 위원장 : 운영과장 임건혁

- 위  원 : 토목 6급 김동우, 행정 7급 하수용, 토목 7급 윤걸

공업 7급 임태섭, 토목 8급 이상훈

❍ 심의결과 : 본안 통과

심의 대상

❍ 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역

❍ 계 약 자 : 처리-인선이엔티(주), 운반-(주)보운환경

❍ 계약기간 : 2014. 6. 1. ~ 2016. 5. 31.

❍ 계약금액 : 2,483,043,000(변경전)

❍ 설계변경 사유 : 폐기물 처리위치 변동으로 인한 운반거리 및 시간 감소

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	비고
운반거리, 시간 (왕복)	강북	106km, 184.9분	94.6km, 129.8분	운반거리 : 감 11.4km 운반시간 : 감 55.1분
	광암	134km, 196.8분	122km, 146.3분	운반거리 : 감 12km 운반시간 : 감 50.5분
운 반 비(톤당)	강북	15,597원/톤	12,024원/톤	감 3,345원/톤
	광암	16,512원/톤	13,368원/톤	감 3,144원/톤
처 리 비(톤당)		19,718원/톤	좌 동	변경 없음
계 약 물 량		70,000톤(2년간)	좌 동	변경 없음
계 약 금 액		2,483,043,000원	2,238,117,000원	감 244,926,000원(9.8%)

심의 내용

심 의 내 용	결 정 내 용	비 고
◦설계변경의 타당성 ◦신규공종 단가 산출 적정여부 ◦계약변동(증∙감)물량 낙착률적용 범위(±3％)내 적용 적정 여부 ◦제경비 적정 산정 및 적용 적정성 ◦각종 제반규정 준수 여부	◦ 설계변경 타당함 ◦ 단가 적정적용 ◦ 낙찰율 적용 적정함 ◦ 적정함 ◦ 준수

조치 의견

❍ 설계변경이 적정하다는 심의결과에 따라 설계변경후 본청(재무과)에

변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임 : 설계변경 심의위원회 의결서(별첨).  끝.