투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	잠실철교 보수공사 도장마감을 위한 추가소요 예산 요청

1. 우리사업소에서 시행중인 잠실철교(도로교) 보수공사와 관련입니다.

2. 현재, 시행중인 잠실철교 보수공사는 하류측 교량에 대하여 도장공사를 발주하여, 계획물량 대비 예산부족으로 A=1,800㎡의 잔여 시공물량이 남아 있는 실정으로 집행잔액(121,460천원)을 활용(방침서 참조)하여 추가 시공코자 하며

3. 집행잔액을 활용하더라도 년내 도장완료(마무리)를 위해서는 추가 예산이 소요되어 아래와 같이 예산을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠실철교(도로교) 보수공사

나. 공사개요

◯ 잠실철교 보수(도장) A= 7,282㎡

◯ 한강교량 긴급복구 비축자재 정비(도장) A=2,582㎡

다. 공사기간 : 2014.5.12 ~ 11.28

라. 도 급 비 :  872,890천원

마. 추가 예산지원 소요액  : 78,864천원

사 업 명	예산액 (재배정액)	기 원인행위액	집행잔액 (낙찰잔액 포함)	잔여 물량 시공		비 고
				추 가 소요액	부족예산액
잠실철교 보수공사	880,000	758,540	121,460	200,324	78,864

바. 추가 소요예산 세부내역 : 따로붙임 방침서 참조

붙임 : 잔여물량 추가시공 및 집행잔액 활용계획 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		교량보수과장	07/07 김환겸
협조자
시행	교량보수과-2697	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개