투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	용역계약기간 변경의뢰(구로 50+캠퍼스 건립공사 설계용역)

우리본부에서 시행중인 『구로 50+ 캠퍼스 건립공사 설계용역』의 용역기간 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역건명 : 구로구 거점형 복합 인생이모작 지원센터 건립공사 설계용역

(용역명 변경후 ⇒ 구로 50+ 캠퍼스 건립공사 설계용역)

나. 용 역 비 : 499,590천원

다. 계 약 자 : ㈜디엔비건축사사무소 (대표자 조도연)

라. 용역기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 07. 13

마. 변경내용(용역기간)

구 분	용역금액(원)	변경전 용역기간	변경후 용역기간	비 고
설계용역	499,590,000	********************3	********************0	증)99일

바. 변경사유 : 서울시의 계획설계 변경방침에 따른 설계반영기간 필요

따로붙임 : 1) 용역기간 조정검토 보고서 1부

2) 용역준공기한 조정요청 및 준공기한 연기의뢰서 각1부.  끝.

	건축부장
주무관	이형재		복지시설과장	조영수		건축부장	07/07 이병석
협조자	경리과장	최영미
시행	건축부-8270	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관2동 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/	hjlee0815@seoul.go.kr	/	대시민공개