문서번호	교량보수과-4758
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	강서도로사업소장
김승진		유태용	07/07 이규상
협 조
	주무관			구성철
	주무관			김규춘

『2014년 하반기』

도로시설물 정기점검 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

『2014년 하반기』

도로시설물 정기점검 추진 계획보고

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 계획을 수립 및 시행하여 시설물의 손상 등을 미연에 점검하고 정비하여 이용시민의 편익 을 도모하며 시설물의 내구연한 증대 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조(반기에 1회이상 실시)

『2013년 도로시설물 안전점검 추진계획』(도로시설과-215,‘13.1.7)

교량보수과-421(2013.1.21)호 관련임

□ 추진계획

점검기간 : 2014. 09. 15 ~ 11. 28(53일간)

대상시설 (총 26개소)

(단위 : 개소)

종별	합계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	지하 차도	복 개 구조물
계	26	3	4	1	4	13	1
1종	5	3			1	1
2종	7		1	1	1	3	1
법외	14		3		2	9

※ 남부순환도로 전용도로 해제에 따라 점검시설물 제외(2014.6.19.)

(총 6개소 : 1종→1개소, 2종→3개소, 법종외→2개소)

점검방법 : 시설물 담당직원 (3인 1조)

□ 점검반 편성 : 2개조

- 1조 : 유태용, 김규춘, 손명환,  2조 : 구성철, 김승진, 손명환

※ 소장 : 한강교량(성산,가양,행주) 점검시 참여

※ 교량보수과장 :  한강교량(성산,가양,행주), 염창IC, 경인1지하차도                       점검시 참여

시설물 점검계획

조별	종별	시설물명	9월	10월	11월	담당자
1조	1종	성산대교	9.15~9.19			유태용
	1종	가양대교		10.6~10.10		김규춘
	2종	목동교동측IC			11.3~11.7	김규춘
	법외	화곡지하차도		10.20~10.24		유태용
	법외	노들길지하차도		10.20~10.24		유태용
	법외	오금교동측지하차도			11.3~11.7	유태용
	법외	선유교	9.22~9.26			유태용
	법외	경인철도횡단지하차도		10.13~10.17		김규춘
	법외	오목교동측지하차도		10.13~10.17		김규춘
	법외	목동교동측지하차도		10.13~10.17		김규춘
2조	1종	행주대교(상,하류교)	9.22~9.26			김승진
	1종	경인1지하차도			11.10~11.14	구성철
	1종	염창IC		10.13~10.17		구성철
	2종	염창교		10.13~10.17		구성철
	2종	구일고가차도			11.3~11.7	구성철
	2종	염창지하차도		10.13~10.17		구성철
	2종	경인2지하차도			11.10~11.14	구성철
	2종	가양지하차도				김승진
	2종	올림픽대로복개구조물		10.13~10.17		김승진
	법외	신정교동측지하차도			11.3~11.7	구성철
	법외	고척지하차도			11.3~11.7	구성철
	법외	여의하류2교		10.13~10.17		김승진
	법외	여의하류3교		10.13~10.17		김승진
	법외	행주IC	9.22~9.26			김승진
	법외	여의2지하차도	9.22~9.26			김승진
	법외	여의하류IC	9.22~9.26			김승진

주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 포장파손, 지반침하, 균열(구조안전에 영향을 미치거나, 0.3㎜이상 - 도로시설물 등 태풍 등 취약부분 집중점검 - 배수시설 상태등 불량여부 - 도로표지판, 교통안전시설 파손 여부 등
교량 및 고가	- 교량받침 및 신축이음 거동상태, 배수시설 상태 등
지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수시설 상태, 타일탈락 등
복개구조물	- 구조물(슬래브, 벽체) 균열, 기초하부 세굴여부 등

점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 보수조치

□ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 시설안전자문위원 등과 합동점검 실시후 별도의 보수계획 수립

□ 행정사항

점검후 조치결과 본청 도로시설과에 제출

점검 조치결과는 도로관리시스템 및 FMS시스템에 입력

따로붙임 :  1.‘14년 하반기 도로시설물 정기점검결과(총괄) 1부

2.‘14년 하반기 도로시설물 정기점검 보고서 1부.  끝.