함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	범한엔지니어링종합건축사사무소 책임감리원 귀하
(경유)
제 목	물품변경계약체결 통보(암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매설치_총차,3차)

1. 재무회계과-8770(2014.07.07.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 『암사정수장 통합감시 제어시스템 제작구매 설치_총차,3차』에 대한 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 감리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 암사정수장 통합감시제어시스템 제작구매설치_총차,3차

나. 계약금액 : 변동없음

다. 계약기간

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	‘10.08.13~’14.06.30	‘10.08.13~’14.10.30	122일증
3차	‘14.04.06~‘14.06.30	‘14.04.06~‘14.10.30	122일증

붙임 : 1) 물품변경계약공문 1부.

2) 변경계약 관련서류 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	서기종		기전설비과장	07/07 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4548	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개