함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	물품변경계약체결통보[암사정수장 계측제어설비 제작구매 설치]

1. 생산부 기전설비과-4266(2014.06.26)호와 관련입니다.

2. 『암사정수장 계측제어설비 제작구매 설치』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 조달계약 체결하고 안내드리니 업무추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 계약자 : **************

나. 계약금액 (변동없음)

● 전체분 719,000,000원

● 3차분  122,450,000원(수수료 1,178,580원 별도)

다. 계약기간

구분	당 초	변 경	비 고
전체	’10.10.14∼’14.06.30	’10.10.14∼’14.10.30	122일 증
3차	’14.04.03∼’14.06.30	’14.04.03∼’14.10.30	122일 증

라. 준공기한 변경사유

- 계측제어설비는 통합감시제어시스템과 연결된 시스템 설비로서 시험운전 기간중 자동 및 원격운전 감시의 실제 데이터 전송확인, 보완이 필요하여 납품기한을 연기.

붙임 : 1. 물품계약서(최종) 1부.

2. 합의서 및 물품계약일반조건 등 각 1부.  끝.

	재무회계과장
★주무관	박은미		재무회계과장	07/07 채규평
협조자
시행	재무회계과-8769	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	shsarang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)