문서번호	정수운영과-4467
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
김홍석		김창현	07/08 이철해
협조
	주무관		유혜영

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

사업장폐기물(무기성정수오니)처리용역

최종기성 준공 및 계약금액 정산 보고

2014. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

사업장폐기물(무기성정수오니)처리용역

최종기성 준공 및 계약금액 정산 보고

광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역의 3차년도 계약기간 만료에 따른 최종기성준공 및 실제 폐기물 운반처리량 감량에 따른 계약금액을 다음과 같이 감액정산처리 하고자함.

1		용역개요

건  명 : 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약)

용역기간 : 2012. 06. 01 - 2014. 05. 31

용역내용 : 운반 및 처리 8,799㎥

총용역금액(운반비+처리비) : ￦326,435,530원(2년)

도급자 : - 처리업체 【인선이엔티(주)】 대표 이형근

- 운반업체  【(주)보운환경】 대표 안영자

2		계약금액 및 기성금 지급현황

연도별 계약금액 및 기성금 지급 현황

년도별	용역기간	연차별 계약금액		기성금액		총계약금 변경
		물량(㎥)	금액(원)	물량(㎥)	금액(원)
합 계		10,400	385,835,000	7,707	285,921,770
1차년도	2012. 6. 1~12.31	2,555	94,787,870	2,555	94,787,870	385,835,000 (10,400㎥)
2차년도	2013. 1. 1~12.31	5,545	205,717,820	3,944	146,318,350	326,435,530 변경 (8,799㎥)
3차년도	2014. 1. 1~ 5.31	2,300	85,329,310	1,208	44,815,550	285,921,770 정산 (7,707㎥)

2014년 차수별 기성금 지급 현황

구분	폐기물 처리물량(㎥)	기성금 지급현황
		합 계	㈜보운환경	인선이엔티(주)
1차(2월)	399	14,802,490	7,105,390	7,697,100
2차(3월)	167	6,195,520	2,973,930	3,221,590
3차(4월)	271	10,053,820	4,825,960	5,227,860
4차(5월)	120	4,451,880	2,136,960	2,314,920
5차(6월)	251	9,311,840	4,469,800	4,842,040
합계	1,208	44,815,550	21,512,040	23,303,510

3		추진상의 문제점

2014 폐기물 운반처리 최종(5차)기성 물량변경 발생

2014년 최종작업(5차) 지연처리(당초 5. 31  → 7. 3 완료)

4		처리의견

2014 폐기물 운반처리 물량 변경

3차년도 계약기간 만료에 따른 당초 계약물량(2,300톤)과 실제 폐기물 운반처리량 차이량(1,092톤)에 대해서는 감액 정산처리 하고자함.

2014년 최종작업(5차) 지연처리에 따른 지연배상금 부과

당초 폐기물 운반처리 중공기한이 2014. 5. 31일이나 2014. 7. 3일자로 준공검사원이 접수처리되어 준공지연에 따른 지연배상금을 부과하고자 함.

5		행정사항

계약금액 정산지급

지연배상금 부과

붙임 : 1. 계약금 정산 합의서 1부

2. 기성금 정산내역서 1부. 끝.