투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교통안전시설 원인자 부담공사 준공기한 연기요청

우리부에서 시행 중인 『신림2 빗물펌프장 설치공사』에 대한 준공기한이 연기됨에 따라 다음과 같이 “교통안전시설 원인자 부담공사” 준공기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

= 원인자 부담공사 변경 현황 =

구분		공사기간	계약 업체 현황			비고
			설계사	감리사	시공사
교통신호기	당초	2013.4.1. ~2014.6.30	㈜건영이엔씨	㈜건영이엔씨	㈜대로신호	감리사 : 교통운영과 단가계약업체
	변경	2013.4.1. ~2014.12.15	변경없음	변경없음	변경없음
노면표시	당초	2013.4.1. ~2014.6.30	㈜건영이엔씨	㈜건영이엔씨	영도개발(주)
	변경	2013.4.1. ~2014.12.15	변경없음	변경없음	변경없음
안전표시	당초	2013.4.1. ~2014.6.30	㈜건영이엔씨	㈜건영이엔씨	케이로드
	변경	2013.4.1. ~2014.12.15	변경없음	변경없음	변경없음

첨부 : 공사 준공기한 연기 변경계약서 1 부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장)
주무관	이정국		방재시설과장	서관석		방재시설과장	대결 07/08 서관석
협조자
시행	방재시설부-5867	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층	/
전화	3708-8690	/전송	3708-2599	/	jung55g@seoul.go.kr	/	대시민공개