문서번호	설비부-7367
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박시현	이달영	07/08 박기형

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

공사 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

공사 준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」 선행공정인 토목공사 지연으로 전기공사 준공기한(총차, 4차)을 아래와 같이 연기하고자 검토 보고 드림.

1				공사개요

□ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사

□ 공사기간 : 2009. 08. 03 ~ 2014. 07. 31

□ 총사업비 : 1,974,417천원

(도급 : 1,007,371천원, 관급 : 903,218천원, 이전비 : 63,828천원)

□ 공사규모 : L = 1,160m(지하차도 736m, 4차선)

수전설비 471kW, 가로등 106등, 지하차도등 903등, 기타1식

□ 시 공 사 : (주)정안전기 (대표 이학용) + (주)왕선전설 (대표 조정현)

□ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

2				관련근거

□ 토목부-12366(‘14.6.27) 준공기한 및 폐기물처리 용역 연기 검토보고

□ 전기공사 준공기한 연기 요청[남부감 제14-214(‘14.07.08)]

3				보고 내용

□ 준공기한 연기 내용

구 분		준 공 기 한		비 고
		당 초	변 경
전기공사	총 차	‘09.08.03.~’14.07.31	‘09.08.03~’15.01.31	184일 연장
	4 차	‘13.08.16~’14.07.31	‘13.08.16~’15.01.31

□ 준공기한 연기 사유

○ 선행공정인 토목공사 지연(한전 지중화 사업 추진 등)으로 인한 전기    공사 준공기한 연기

□ 귀책사유 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 공사금액 : 변경없음.

□ 책임감리원 검토 의견

- 한전 지중화사업 추진 등으로 선행공정인 토목공사가 지연되어 후속    공정인 전기공사의 준공기한을 연기하는 것이 타당하다고 판단함.

4				보고자 검토의견

□  책임감리원의 준공기한 연기 보고가 타당한 것으로 판단되어 준공기한을 연기하여 시공에 만전을 기하고자 재무과에 변경 계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 토목부 검토보고서 1부.

2. 전기공사 준공기한 연기 요청 1부. 끝.