문서번호	도시철도사업부-3605
결재일자	2014.7.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
정영호		이승우	07/08 한동근
협조
	주무관		김정수

- 우이-신설 도시철도 민간투자사업 1공구 -

2014년 7월 2째주 휴일 및 주중 야간 감리 근무계획 승인 검토보고

2014. 07.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

2014년 7월 2째주 휴일  및 주중 야간 감리 근무계획 승인 검토보고

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(1공구) 건설공사와 관련하여 시공사 휴일 및 야간 작업계획서에 대해 감리단이 시공사에 이를 승인 통보하고, 감리단의 휴일 및 야간 근무계획 승인 신청서를 제출에 따른 검토보고임

Ⅰ				휴일 및 야간근무 요청내용

관련근거 : 평감(우이) 2014-264호(2014. 07. 08)

휴일 및 야간 근무일자

- 휴일 근무일자 : 2014. 07. 12(토) ~ 07. 13(일)

- 야간 근무일자 : 2014. 07. 14(월) ~ 07. 18(금) 18:00~20:00 (2시간)

Ⅱ				휴일 및 야간근무 계획

관련근거

- 입찰안내서 제6장 6.2.3 휴일 및 야간작업 근무요령

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조제3항 (감리원의 근무수칙)

책임감리의 휴일 및 야간작업 승인조건

- 휴일 및 야간작업 시행 2일전 작업세부계획 수립하고 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 근무자 정위치 배치토록 조치할 것

- 지하매설물 관련 규정을 숙지하여 이행하고, 안전수칙을 지켜 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 만전을 기할 것

- 위험한 작업의 내포 또는 지장물 등의 근접작업으로 유관기관의 입회가 필요할 경우 평일 주간에 시행할 수 있도록 할 것.

- 휴일 및 야간 작업시 감리원은 1~2인 탄력적으로 근무하되, 감리비는 시공사 부담(입찰안내서 제6장 6.2 규정에 따라 원인자 부담)

휴일근무 주요내용

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용	비고
07. 12(토)	주 간 (감리원 2인)	∘ 차량기지 : 철근 조립 및 거푸집 설치 ∘ L01정거장 : 암깨기 및 집토 ∘ L01E환기구 : 굴착 및 집토, 1단 가시설 설치 ∘ 본선2구간 : 굴착 및 반출, 2단 가시설 설치 ∘ L02정거장 : 굴착 및 집토, 2~3단 가시설 설치 ∘ L03정거장 : 굴착 및 집토, 2~3단 가시설 설치	*** ***
07. 13(일)	주 간 (감리원 1인)	∘ 차량기지 : 철근 조립 및 거푸집 설치 ∘ L01정거장 : 암깨기 및 집토 ∘ L01E환기구 : 굴착 및 집토, 1단 가시설 설치 ∘ 본선2구간 : 굴착 및 집토, 1~2단 가시설 설치 ∘ L02정거장 : 굴착 및 반출, 2~3단 가시설 설치 ∘ L03정거장 : 굴착 및 집토, 2~3단 가시설 설치	***

야간 작업 주요내용 및 감리단 야간 근무자 현황

구분	작업구간	작업일시	작업내용	근무자
야간작업	L01E환기구 본선2구간 L02정거장 L03정거장	2014. 07. 14(월) ~ 07. 18(금) 18:00 ~ 20:00 (2시간)	∘토사굴착 ∘암깨기 및 집토 ∘구조물 철근 제작 ∘현장 정리 및 정돈 등	감리1명

구분	07. 14(월)	07. 15(화)	07. 16(수)	07. 17(목)	07. 18(금)	비고
야간작업	위호진	김민수	박흥수	위호진	김민수

Ⅲ				검 토 결 과

책임감리원의 검토내용과 같이 작업의 연속성과 공정만회를 위해 공정계획에 지장이 없도록 감리원 휴일 및 야간 근무계획을 승인하고자 함

붙   임 : 관련 서류 각 1부.  끝.