투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	기계설비 하도급 변경 계약 통보 (강남순환도시고속도로 8공구)

1. 동명기술공단 동기강 2014-142호(‘14. 7. 3) 와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사의 기계설비공사 하도급

변경 계약내용을 다음와 같이 통보합니다.

가. 하도급 계약 현황

공 종	원도급자	하도급 내용					비고
		하도급자	하도급 공사기간	원도급액 (원)	하도급액 (원)	하도급율 (%)
구룡지하차도 기계설비공사	롯데건설(주) (주)신창건설	한산시피에스 (주)	‘13.4.24 ~‘14.12.30	181,985,100	163,900,000	90.06

나. 하도급 변경사항 : 하도급 계약기간 변경

- 당     초 : ’13. 04. 24. ~ ’14. 05. 30.

- 변 경 후 : ’13. 04. 24. ~ ’14. 12. 30.

- 변경사유 : 선행공정인 구룡지하차도 구조물 공사지연. 끝.

	설비부장
수신자	건설총괄부장,토목부장
주무관	장석춘		열빛총괄과장	권오식		설비부장	07/08 박기형
협조자
시행	설비부-7345	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개