문서번호	급수운영과-15372
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		남부수도사업소장
정헌석	강동길	장시명		07/09 전영석
협 조

설계변경 사전심의 결과보고

(2013년 관악금천구관내 상수도(급수 불용관정비등)공사 건설폐기물 처리용역-최종

2014. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관내 『2013년 관악금천구관내 상수도(급수 불용관정비등)공사 건설폐기물

처리용역)』 에 대하여 설계변경 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7. 8.

보 고 자  직 :  지방시설주사보  정헌석

□ 공사 현황

○ 용 역 명 : 2013년 관악금천구관내 상수도(급수 불용관정비등)공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요

- 당초 : 폐아스콘 510㎥, 폐콘크리트 970㎥, 폐토사 15㎥, 폐계량기보호통 1㎥

- 변경 : 폐아스콘 66㎥, 폐콘크리트 916.52㎥, 폐토사 - ㎥, 폐계량기보호통 -㎥

○ 공사기간 : 2013.07.11. ~ 2014.07.10.

○ 도 급 액

- 당초 : 58,933,000원

- 변경 : 47,629,000원  감11,304,000원

○ 수 급 사 : 문화기업㈜  대표 김 태 흔

□ 설계변경 심의 위원회 개최

○ 일    시 : 2013. 7. 7.(월) 13:00

○ 장    소 : 2층 회의실

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장(1명), 심의위원(시설관리과 3명)

급수운영과 강동길

□ 심의 위원회 검토 내용

○ 시공물량 감에 따른 집계표의 수량 상이여부 검토

□ 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	공급가액	53,575,455	43,299,091	감 10,276,364
	부 가 세	5,357,545	4,329,909	감 1,027,636
	계	58,933,000	47,629,000	감 11,304,000

□ 처리의견

○ 우리사업소 설계변경 심의 위원회에서 변경설계도서에 대하여 위 사항을 검토결과

적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바 원안 처리코자 합니다.

첨부 :  설계변경 심의 의결서 1부. 끝.