다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 교통사고 잦은 곳 개선사업 사업계획 변경 및 예산 재배정

1. 동작구 교통행정과-21200(2014.6.27.)호와 관련입니다.

2.“2014년 교통사고 잦은 곳 개선사업”지점중 사당로, 이수교차로의 민원 등에 따른 사업계획 변경 요청과 관련하여 아래와 같이 사업계획 변경 및 예산 조정 재배정 하오니, 각 사업부서에서는 변경 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 예산 재배정내역

(단위 : 원)

예산과목			재배정부서		누계재배정액	기재배정액	금회재배정액		비 고 (관련공사명)
부서 정책 단위	세부사업	통계목
도시교통본부 (교통운영과) 도시교통체계 및 소통개선 교통소통 및 안전관리강화	교통사고 잦은 곳 개선	시설비 (401-01)	동작구청	교통 행정과	36,070,000 (X18,035,000)	56,461,000 (X28,230,500)	▽	20,391,000 (X10,195,500)	사당로, 이수교차로 토목, 가로등 사업비 감
			남부도로사업소	도로 보수과	189,130,000 (X94,565,000)	189,130,000 (X94,565,000)		-	향후 예산잔액 일괄 감 재재정 예정
				기전과	200,746,000 (X100,373,000)	200,746,000 (X100,373,000)		-	예산 요청시 재배정 예정

나. 사업계획 변경내용

ㅇ 동작구 교통행정과 : 사당로 보도 확충(3개소→1개소, 사업비 감 10,400천원),                                             이수교차로 주변 가로등 설치 제외, 사업비 감 9,991천원)

ㅇ 남부도로사업소 도로보수과 : 사당로 보도간 횡단보도 2개소 설치 제외(별첨 도면 참조)

ㅇ 남부도로사업소 기전과 : 이수교차로 이등용 가로등 설치(별첨 공문 및 현황사진 참조)

붙임 : 1. 2014년 교통사고 잦은곳 개선 예산재배정부 1부

2. 사당로 사업계획 변경도면 1부

3. 사당로 공사비 감 내역서 1부

4. 이수교차로 이등용 가로등 설치 검토공문(동작구) 1부

5. 이수교차로 이등용 가로등 설치 개요도(현황사진) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	동작구청장(교통행정과장),남부도로사업소장(도로보수과장),남부도로사업소장(기전과장)
주무관	양해선		교통운영팀장	최정수		교통운영과장	07/09 강진동
협조자	주무관	김용주		실무사무관	국중연
시행	교통운영과-12833	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	02)2133-2446	/전송	02)2133-1053	/	www.seoul.go.kr	/	부분공개