문서번호	도로시설과-12169
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
박주완		김종호	07/09 이용심
협조

남산1호터널 정밀안전진단 용역비 증액 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도 시 안 전 실

(도로시설과)

남산1호터널 정밀안전진단 용역비 증액 검토

서부도로사업소에서 남산1호터널 정밀안전진단 기술용역타당성 재심사

결과에 따른 용역비 증액 배정 요청에 대하여 검토 보고함

1		용역 개요

□ 용 역 명 : 남산1호터널 정밀안전진단용역

□ 용 역 비 : 179,696천원

□ 발주기관 : 서부도로사업소 (시설보수과)

□ 용역기관 : 한국시설안전공단

※ 공단 전담시설물 고시(국토교통부고시 제2012-606호, ‘12.9.17)

2		추진 경과

□ ‘13.8.19 : 용역 타당성심사 결과(기술심사담당관)

❍ 심사결과 : 188,090천원(심사요청) → 179,720백만원 (감 8,370천원)

□ ‘14. 5.    : 용역계약 요청(서부도로사업소→공단)

□ ‘14. 6. 2 : 용역대가 검토결과 통보(한국시설안전공단→서부도로사업소)

□ ‘14. 6. 9 : 부족 예산 요청(서부도로사업소→도로시설과)

서울시 발주	공단 요청(대가기준)	부족예산
179,696천원	258,558천원	79,000천원

□ ‘14. 6.12 : 공단 용역책임기술자와 업무협의(도로시설과→공단)

❍ 공단 요구사항 : 최소 홍지문터널 적용 대가수준 요구 (224,789천원)

□ ‘14. 7. 3 : 기술용역타당성 심사결과(기술심사담당관→서부도로사업소)

❍ 용역비 조정 : 224,730천원 → 222,640천원

□ ‘13. 7. 4 : 남산1호터널 안전진단용역 예산 재요청

3		검토 의견

□ 기술용역 타당성심사 결과에 따라 증액된 정밀안전진단 용역비(42,920천원)을      서부도로사업소에 추가 재배정하고자 함

❍ 용역비 증액

(단위 : 천원)

예 산(A)	당초 용역발주	타당성 재심사(B)	용역비 증액(C-A)
179,720	179,696	222,640	증 42,920

❍ 용역비 추가배정

(단위 : 천원)

2014년 예산	배정 예산		잔여 예산
	기 배 정	추가배정
9,442,626	9,362,673	42,920	37,033

- 예산과목 : 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비.  끝.