문서번호	보행자전거과-7683
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자전거교통팀장	보행자전거과장
변재홍		전태호	07/09 이원목
협조
	주무관		김지수

2014년 자전거도로 추가예산요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시교통본부

(보행자전거과)

‘14년 자전거도로 추가 예산요청에 대한 검토보고

‘14년도 자전거이용시설 유지보수 예산에 대하여 종로구에서 사업시행중 추가 예산요청이 있어 이에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거 및 예산현황

□ 관련근거

○  2014년 자전거이용시설 정비 및 관리계획〔보행자전거과-2519호(`14. 3. 5)〕

○  2014년 자전거도로 정비대상 선정 및 사업예산 재배정 통보

〔보행자전거과 – 2543호(`14. 3. 6)〕

○  율곡로외 2개구간 정비공사 예산 추가배정요청

〔 종로구 교통행정과 - 29001호 (`14.6.20)〕

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산현액	기배정액	배정후잔액	금회 신청액
예산내역	1,300	669.9	630.1	27.5

○ 예산과목(교통사업특별회계)

- 보행자전거과(부서), 자전거이용활성화 및 교통환경개선(정책),  자전거이용환경개선(성과목표), 자전거이용시설 확충 및 관리(단위), 자전거도로유지보수(세부), 시설비(202-401-01)

□ 지원기준

○ 지원대상

-  특별시도상 자전거도로 및 부속시설물

-  시도와 통합적 관리의 필요가 있는 구도구간(단절구간 연계 등)

○ 세부지원내용

- 자전거도로 파손구간, 노면표시 노후, 탈락 등 유지보수 시급한 구간

- 자전거도로 분리시설물(탄력봉, 표지병 등)의 파손

- 교통안전표지 파손 교체, 보완이 필요한 곳

- 교차로 등 차량과의 상충구간으로 안전시설 보강 또는 개선이 필요한 곳

Ⅱ		예산신청내용 및 검토결과

□ 예산신청내용

○ 율곡로외 2개소 안전표지 및 노면표시 추가공사 시행

- 도심구간 자전거이용자 안전을 위하여 안전시설을 보강하는 공사로 이용자의 안전을 위해 필요한 시설로 추가예산 요청함.

- 자전거보행자 겸용도로 안전표지 92개소, 노면표시 4,447m정비

○ 추가 예산요청현황

(단위 : 천원)

구분	기배정금액	추가요청금액	총 소요금액	비고
종로구	16,000	27,500	43,500	도심구간 안전시설 정비사업으로 지원

□ 검토결과

○ 우리시에서 추진하는 도심내 자전거도로망 구축사업과 연계하여 추진되는 사업으로 자전거 이용자의 안전과 편의를 위하여 우선 지원함이 타당함

Ⅲ		조치사항

□ 지원 요청한 예산 재배정(종로구)

□ 자전거 이용시설물 및 집행현황 관리

붙임 : ‘14년 자전거도로 정비사업 예산집행현황 1부. 끝.

`14년 자전거도로 정비사업 예산배정현황

(단위 : 천원)

기관명	공사현황		기 지원금액	금회지원
	정비구간	사업개요
계			669,900	27,500
서부도로	연서로(2.3㎞중 492m) (연신내~응암역)	유색포장 375㎡ 노면표시 9,200m	42,600
종로	율곡로(1.8㎞)대학로(1.1㎞) 창경궁로(1.18㎞)	안전표지 40개소 노면표시 1,510m	16,000	27,500
중구	동호로(2.4㎞)	유색 포장 300㎡ 안전표시 9개소	14,700
광진	구천면로(0.4㎞)	유색포장 L=300m, A=7.6a, 노면표시 200m 도로경계석 설치 L=58m, 보도 정비 A=50㎡	23,100
동대문	중랑천 진입도로 (32.1m)	유색포장 124㎡ 경계석설치 58m 보도포장 65㎡ 노면표시 106m	29,300
성북	화랑로 월곡로 한천로66길	유색포장 1,033㎡ 경계석설치 115m, 노면표시 830m 안전펜스설치 111m	87,400
노원	수락산길(2.5km) 당현길(1.1km) 느티울길(1.2km) 화랑로(0.4km)	유색포장 250㎡ 노면표시 7,000m 시선유도봉 50개 교체	51,300
은평	연서로~북한산로(485m)	유색포장 485m B=1.2m 도로경계석 설치 L=120m 안전표지 16개소, 노면표시 80m	41,100
서대문	홍제내길(0.5㎞)	노면표시 L= 463m 노면표시 재도색 L= 687m 도색제거 L=457m	8,300
양천	목동동로(8.6㎞) 목동서로	노면표시 1,006m	5,600
강서	양천로27길(0.31㎞) 공항대로45길 양천로 5길	휀스 설치 120m 표지판 60개 노면표시 408m	35,000
구로	신도림중앙길(0.81㎞) 궁골길(1.03㎞) 온수동길(1.37㎞)	분리시설(u형볼라드)교체90m 표지병 교체 40개 유색포장 150㎡, 노면표시 재부착 25개 안전표지 설치 34개	48,900
영등포	선유로 43길 (선유고~롯데제과간)	유색포장보수 L=290m	32,800
동작	현충로 단절구간	유색포장 L=392m, B=1.5m, A=588㎡ 안전표지 2개소	57,700
관악	봉천로 (1.45㎞)	시선유도봉 80개, U형볼라드 25개 노면표시 1,329m, 유색포장 590㎡	59,200
서초	강남대로외7개노선 반포로,(1.2㎞) 사평로,(1.0㎞)	노면표시 1,400m	19,800
강남	삼성로(1.8㎞)	차선규제블럭 설치 347m 차선도색 1,620m 시선유도봉 40	36,500
송파	백제고분로외3개노선 오금로(0.4㎞) , 충민로(1.87㎞)	아스팔트포장 605㎡ 시선유도봉 100개 도로표지병 288개 주차시설 정비 85대	48,200
강동	천호대로(2.8㎞) 도로정비 동남로(2.06㎞)	시선유도테이프 : 300개, 표지병 교체 100개 자전거 노면표시테이프 : 10개 표지판 : 4개	12,400