투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인

1.  서울SH공사 토목3팀-3741호(2014.6.30.)와 관련입니다.

2.  귀 사에서 시행하고 있는『문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설(노면표시) 설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사사행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설(노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 문정동 문정지구 주변도로(동남로, 송파대로, 새말로)

다. 변경사항

공사명	구분	설계	감리	시공사	원인자	공사기간 변경
						당초	변경
문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설(노면표시) 설치공사	노면표시	도로 교통공단	도로 교통공단	㈜창희 이엔에스	서울특별시 SH공사	공사승인통보일 ~ 2014.6.30	공사승인통보일 ~2014.12. 31

라. 변경사유 : 기설치된 가설방음벽 이설 등에 따른 추가 공사기간 필요. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	SH공사사장,서울송파경찰서장(교통과장),송파구청장(녹색교통과장)
★주무관	유현선		도로보수과장	07/09 代박일연
협조자
시행	도로보수과-3970	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개