문서번호	건축부-8420
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	07/09 이병석
협조	장애인재가복지팀장		김지형
	주무관		이민영

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』

예비준공검사 시행계획

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」관련 준공기한이 도래함에 따라 준공관련 내.외부 시설공사 마감상태를 사전점검하여 시설물 이용자의 사용편의를 도모코자 함.

공사개요

○ 위    치 : 노원구 덕릉로 70가길 98(노원구 상계동 771번지)

○ 규     모 : 지하1층/지상4층, 연면적2,752.84㎡, 노유자시설

○ 공사내용 (공정 90%)

- 지하1층 다목적강당, 식당, 전기, 기계실 등 / 지상1층 안마치료실, 관리팀 등 / 지상2층 열린점자교육실, 음악치료실 등 / 지상3층 복사녹음자료실, 녹음부스 등 / 지상4층 통합사무실, 대회의실 등 / 옥상 옥상정원, 태양광 발전설비 등

- 주요자재

· 천장 : 친환경흡음텍스, 친환경텍스, 친환경수성페인트 등

· 바닥 : 무석면 비닐계타일, 논슬립바닥타일, 화강석 등

· 벽   : 친환경수성페인트, 도기질타일 등

○ 공사기간 : 2013.01.02. ~ 2014.08.31.

○ 시 공 사 : 천마산건설(주) 외 1개사

관련근거

○ 건설공사 예비준공검사 전면 실시 [행정2부시장 방침 제316호(2012.09.25)]

- 발주부서 주관으로 유지관리부서와 합동실시

예비준공검사 시행개요

○ 일  시 : 2014. 7.17.(목) 10:00 ~

○ 장  소 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사 현장

○ 점검자

- 도시기반시설본부 : 건축부 주무관 3명 (이형재, 조영두, 권기용)

- 주관과(장애인자립지원과) 담당

- 운영자 : (사)한국시각장애인 연합회 서울특별시립노원시각장애인 복지관

○ 입회자

- 감리 : 감리단장

- 시공 : 현장대리인

○ 예비준공검사 내용

- 공사 내용 중 미비한 사항의 사전 보완
- 공사 품질확보 및 하자발생 여부 사전점검 예방 등

향후계획

○ 2014. 07월 : 점검결과에 따른 후속조치 완료

○ 2014. 07~08월 : 공사준공

○ 2014. 08월 : 시설물 인계인수(도기본 건축부 → 장애인자립지원과)

첨부  예비준공검사 조서. 끝