문서번호	시설보수과-4968
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
최완		정재현	07/09 이승진
협조

공사 설계변경(제2회) 검토보고

(화랑고가 성능개선공사)

2014. 7

북부도로사업소

[시설보수과]

공사 설계변경(제2회) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 『화랑고가성능개선공사』에 대하여 서울시시설관리공단 공사감독2처-10621호(2014.07.07)로 설계변경(2회) 보고가 접수되어 이에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 화랑고가 성능개선공사

○ 공사기간 : 2013년 5월 8일 ~ 2014년 8월 31일

○ 도 급 액 : 837,529,000원

○ 공사개요 : 교량받침설치 - 68개소, 연단보강 – 14개소(P1~P3, P6~P9)

○ 시 공 자 : 현근이엔씨(주)

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처

□ 보고내용

○ 설계변경 사유 : 실정보고 사항 설계변경

○ 실정보고 주요내용

- 연단보강 증가로 기존 교량점검로 철거후 재설치 및 고재대 반영

- 연단보강부 안전성 확보를 위해 콘크리트 천공 등 추가

- 교좌장치 교체에 필요한 고정철판 수량 누락되어 사급자재 반영

․ 실정보고 : 시설보수과-4584호(2014.06.26)

공사감독2처-9293호(2014.06.19)

- 철도구간 안전관리자(철도운행, 전기안전, 감시원) 반영

․ 실정보고 : 공사감독2처–9129호(2014.06.18)

- 공중비계, 낙하물방지 등 부대공 설치부분 정산수량 반영

․ 실정보고 : 시설보수과-8072호(2013.11.07.), 강북공사관리처-11034호(2013.10.29)

○ 설계변경 내역(물량 증,감)

(금액:원)

구 분		당 초	변 경	증,감
총 공 사 비		867,529,000	867,529,000	-	-
도급비	공급가액	761,390,000	761,390,000	-	-
	부가가치세	76,139,000	76,139,000	-	-
	계	837,529,000	837,529,000	-	-
이 전 비		30,000,000	30,000,000	-	-

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 내용과 같이 수량 증ㆍ감에 따른 설계변경을 시행하여 화랑고가 성능개선공사 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 관련공문 및 설계변경 내역서 각 1부.    끝.