문서번호	도로보수과-5989
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	07/09 이승진

설계변경 시행계획(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)」

설계변경 시행계획(제1회)

「2014년 도로파손 긴급복구공사」 시행중 현장여건에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 검토하여 설계변경 시행코자 함

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 소규모포장복구 37a, 절삭 덧씌우기 245a, 출동․대기 290hr

○ 공 사 비 : 1,104,239,650원

- 도급비 571,839,650원, 관급비 512,400,000원, 이전비 20,000,000원

○ 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

○ 도 급 자 : 유비럭스(주) 대표 김 영 근

2. 설계변경 사유

○ 차도 포트홀 모니터링단 운영 등에 따른 공종별 정비물량 조정

- 당초 : 소규모 포장복구 37a, 절삭 덧씌우기 245a, 출동․대기 290hr

- 변경 : 소규모 포장복구 74a, 절삭 덧씌우기 74.3a, 출동․대기 380hr    ○ 포장 불량구간 정비에 따른 신규공종 추가

- 절삭 덧씌우기 : t=5㎝(야간, 25a/일, 4차로), t=10㎝(야간, 14a/일, 2차로)

- 동공 보수     : t=20㎝(주간, 굴삭기)

○ 공종별 정비물량 조정에 따른 관급자재량 변경

- 아스콘 : 표층(WC-5, #67) 증500톤, 기층(재생, #467) 증541톤

표층(WC-2, #78) 감3,081톤

- 미끄럼방지포장재 : 인수봉길 미끄럼방지포장 복구(증300㎡)

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	1,104,239,650	1,104,239,650	-
도 급 비	571,839,650	737,189,650	증)165,350,000
관 급 비	512,400,000	347,050,000	감)165,350,000
이 전 비	20,000,000	20,000,000	-

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사업비내에서 설계변경 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임  변경내역서 1부. 끝.