문서번호	도로보수과-5988
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최진규	이석재	07/09 이승진

설계변경 시행계획(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사」

설계변경 시행계획(제1회)

「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사」 시행중 현장여건에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 검토하여 설계변경 시행코자 함

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 화강석포장 보수 300㎡, 줄눈보수 150㎡ 등

○ 공 사 비 : 275,944,780원

- 도급비 181,944,780원, 관급비 44,000,000원, 이전비 50,000,000원

○ 공사기간 : 2014.5.15.~2015.2.28

○ 도 급 자 : ㈜사림엔지니어링 대표 이영걸

2. 설계변경 사유

○ 발주 당시 추정물량 대비 해빙기 이후 보수물량 증가

- 당초 300㎡, 변경 400㎡  ※ 포장 노후 및 강우 등으로 보수물량 증가

○ 관급자재(화강석 판석) 구매 소요기간(2~3주)을 감안 보수용 자재 사전 확보

- 당초 330㎡, 변경 530㎡

○ 화강석포장 보수 시 실측결과 두께 변경(사림1406-6, ‘14.6.7)

- 당초 t=150㎜, 변경 t=160㎜ <바닥 붙임몰탈 증량>

○ 철거자재 재활용비 반영(도로보수과-4748, ‘14.6.1)

○ 공사구간 내 이음몰탈 유출로 인한 분진과 화강석 깨진 부스러기 청소 반영

(도로보수과5956, ‘14.7.8)

○ 기타 공종별 정비물량 조정에 따른 물량 변경

3. 설계변경 금액

(단위 :원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	275,944,780	300,000,000	증)24,055,220
도 급 비	181,944,780	225,500,000	증)43,555,220
관 급 비	44,000,000	64,500,000	증)20,500,000
이 전 비	50,000,000	10,000,000	감)40,000,000

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 추가 소요공사비는 낙찰차액을 사용 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

따로붙임  변경내역서 1부. 끝.