문서번호	방재시설부-5932
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	방재시설과장
김학지		오수양	대결 07/09 서관석
협조

용두3 빗물펌프장 신설공사

교통처리계획 용역 외 부대공 검토 보고

2014. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

용두3 빗물펌프장 신설공사

교통처리계획 용역 외 부대공 검토 보고

용두3 빗물펌프장 신설공사와 관련하여 서울시시설공단으로부터 교통처리계획용역 외 부대공에 대한 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 위    치 : 서울시 동대문구 용두동 1158-75

❍ 공 사 명 : 용두3, 신이문 빗물펌프장 증설공사

❍ 규    모 : 펌프장 신설 1개소, 유입관거 신설 L=217m

❍ 사업기간 : 2012. 12 ∼ 2015. 5

❍ 감리사/시공사 : 시설관리공단/동도건설(주)외 1개사

❍ 도 급 비 : 3,145백만원(신이문펌프장 포함)

실정보고 내용

❍ 현황 및 문제점

- 용두3빗물펌프장을 신설함에 있어, 기존 왕산로23길을 전면 도로점용 후 지하빗물펌프장 신설하도록 설계되어 있으며

- 펌프장 신설에 따른 교통소통대책에 따라 교통안전시설물 설치가 필요

- 펌프장 신설에 따라 도로점용 및 현장사무실 설치 후 공사착공하였으나 제기동역사 구조물과의 이격거리 확보와 수두차 부족으로 인한 자연  유하 불가 등으로 재설계에 따른 현장사무실 철수

❍ 교통소통대책 수립 및 교통시설물 설치 반영 : 48,408천원

- 교통소통대책수립 용역비                                (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
공급가액		39,308	증) 39,038
부가세		3,904	증) 3,904
도급비		42,942	증) 42,942

- 교통시설물 설치내역 및 설치비                          (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
직접공사비		3,938	증) 3,938
제경비		1,528	증) 1,528
도급비		5,466	증) 5,466

․ 주요공종 증,감현황

공 종	단위	수량		증.감	비고
		당초	변경
교통소통대책 용역비	식		1	증) 1
PE안전휀스	경간		44	증) 44
공사안내표지판	개소		27	증) 27
현수막	개		7	증) 7

❍ 용두3빗물펌프장 사무실 철수 건 : 23,309천원

- 사무실 철거건                                       (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
직접공사비		16,768	증) 16,768
제경비		6,541	증) 6,541
도급비		23,309	증) 23,309

․ 주요공종 증,감현황

공 종	단위	수 량		증.감	비고
		당초	변경
도급자용 사무실	㎡		144	증) 144
시험터파기	개소		3	증) 3
EGI휀스	m		60	증) 60
출입문	개소		0.5	증) 0.5

감리검토내용

❍ 도로점용공사장 교통소통대책 수립 및 교통안전시설(공사안내표지판, 현수막, 보차도 난간대 등)을 설치하여 안전관리에 철저를 기함이 타당하며

❍ 도로 통제 후 후속공정이 불가한 사항으로 지속적 민원제기로 현장사무실 철수함이 타당함

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부. 끝.