함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	물품 납품기한 연기에 따른 변경계약체결 요청

1. 재무과-24253(2014.5.22)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리 센터에서 시행중인『암사아리수정수센터 1송수펌프 고압기동반 4면외1종 제작구매 설치』건에 대하여 아래와 같이 물품 납품기한 연기에 따른 변경계약 체결을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가) 건명 : 암사아리수정수센터 1송수펌프 고압기동반 4면외1종 제작구매 설치

나) 계약일자 : 2014. 5. 21

다) 계약상대 : 대신파워텍(주) 대표 김춘원

라) 납품기한 변경(연기)

- 당초 : 2014. 7. 20

- 변경 : 2014. 11. 30

마) 계약금액 : 금170,285,980원(변경 없음)

바) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 합의서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김효준		정수시설과장	남효돈		소장	07/09 유성종
협조자	주무관	한원일		주무관	변민용		행정관리과장	김영배
시행	정수시설과-1677	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 아리수로 131(암사동 산10)	/
전화	3146-5774	/전송	3146-5706	/	hj613@seoul.go.kr	/	대시민공개