문서번호	공원운영과-9748
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장		동부공원녹지사업소장
권지현	신재원	김제중		07/09 이춘희
협 조
	주무관		김덕수

2014년 산림병해충 민간컨설팅 용역

설계변경 검토보고

2014. 7

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2014년 산림병해충 민간컨설팅 용역 설계변경 보고

□ 추 진 개 요

◯ 대    상 : 시민의숲외 5개 공원, 7개소

◯ 사 업 량 : 병해충 모니터링 후 진단서 발급 19회

◯ 계약업체 : 한국나무종합병원(주) 이희봉

◯ 컨설팅 기간 : 2014. 5. ~ 10. 31

◯ 용 역 비 : 4,352천원

□ 변 경 내 용

◯ 대상지 변경

당초 계획	⇒	변경 후
1. 시민의숲(2개소) - 3회 모니터링 2. 길동생태공원(2개소) - 3회 모니터링 3. 천호공원(1개소) - 3회 모니터링 4. 응봉공원(1개소) - 3회 모니터링 5. 보라매공원(1개소) - 1회 모니터링(완료)		1. 시민의숲(2개소) - 3회 모니터링 2. 길동생태공원(2개소) - 1회 모니터링(완료) 3. 천호공원(1개소) - 3회 모니터링 4. 응봉공원(1개소) - 3회 모니터링 5. 보라매공원(2개소) - 2회 모니터링

※ 총 모니터링 횟수 19회는 변함없으므로 용역비 변경없음.

□ 보고자 의견

◯ 1차 모니터링 실시 결과 병해충 발생상황이 양호한 대상지(길동생태공원)를 소나무류 고사목이 많은 보라매공원으로 변경하여 전문가와 함께 소나무재선충 감염 여부 및 기타 수목의 생육상황 모니터링을 실시하고자 함.  끝.