문서번호	도로시설과-12269
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		한강교량팀장	도로시설과장
김귀용		하현석	07/10 이용심
협조

성산대교 성능개선사업 측량 추가실시 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시안전실

(도로시설과)

성산대교 성능개선사업 측량 추가실시 계획보고

성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 시행중 기존 구조물 교각에 대한 좌표 및 E.L등 세부조사가 필요하여 용역사에서 보고한 측량 추가실시계획 검토보고 사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 개    요 : 구조안전성 검토, 기본 및 실시설계(L=1,455m, B=27~39m)

○ 용역기간 : 2013.11.1 ~ 2015.4.24 (1차 계약기간 : 2014.12.31)

○ 용 역 비 : 2,206백만원(1차 1,850백만원)

○ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링 외 3개사

□ 추진경위

○ 2013.11. 1  :  설계용역 계약 및 착수

○ 2013.11.18  :  발주처 및 용역사 합동 현장조사

○ 2013. 2.21  :  장래 교통량 예측 및 분석보고

○ 2013. 5.19  :  FCM부재(ECB) 관련 피로해석 및 관리방안 자문회의

○ 2013. 6.26  :  외부전문가 자문회의

□ 측량 추가실시 필요성

○ 항공측량 도면과 복원준공도 평면 상이

○ 교량의 시종점 위치 불분명

○ 교각 위치(좌표 및 E.L) 파악 필요

○ 상부슬래브 캔틸레버 길이 파악 필요

□ 추가 측량개요

○ 과업물량 변경

- 램프교 0.72km(중심선측량, 종단측량) 증가

- 본선 및 램프교 횡단측량 0.32km 감소

○ 본선구간 측량

- 교각위치 슬래브 상면 E.L 및 좌표 측량

- 교각기둥 상면․우물통 기초 상면 E.L 및 좌표 측량

- 아치(화장판) 상면 E.L 및 좌표 측량

- 현수부 신축이음부 상면 E.L 및 좌표 측량

- 구조물 현황 상단 횡단면도 및 부대시설물(가로등, 표지판 등) 위치 제원

○ 남․북단 접속교 측량

- 항측 보완도면과 당초 복원도면의 거더를 중첩시켜본 결과 일부 상이하여 거더의 시종점 끝단에 대한 확인 측량

○ 추가 측량 소요예산 : 28,600천원

○ 소요기간 : 약 1.5개월

□ 검토사항

○ 기존 과업에 본선구간만 측량(중심선측량, 종․횡단 측량)이 계획되어 램프교구간에 대하여 추가 측량이 필요하며, 본선 및 남․북단 접속교, 램프교 교각위치의 좌표와 E.L 추가 측량이 필요한 실정이며

○ 우물통 측량시 우물통에 접근할수 있도록 선박지원(약4일) 필요

○ 추가 측량 과업내용

구 간	측량 과업 내용				과업 물량	비 고
	과업내용	당 초	추 가
본선 및 램프교	중심선측량	본선 1.46km	램프교 0.72km		2.18km
	종단측량	본선 1.46km	램프교 0.72km		2.18km
	횡단측량	본선 1.46km	접속교 및 램프 1.14km		1.14km	본선 제외
본 선	교각위치	-	상면 E.L 및 좌표측량		11개소
	교각기둥	-	상면 E.L 및 좌표측량		11개소
	우물통 기초	-	상면 E.L 및 좌표측량		18개소 (9*2개소)	선박지원 필요
	현수부 신축 이음부	-	상면 E.L 및 좌표측량		18개소
	아 치 (화장판)	-	상면 E.L 및 좌표측량		16개소 (8*2개소)
	Shoe	-	E.L 및 좌표측량		측량제외	측정불가
	신축이음부 유간	-	유간측정 및 측정시 온도기록		27개소
접속교, 램프교	최외측 거더	-	끝단 E.L 및 좌표 측량		북단접속교 20개소 남단접속교 14개소
	교각위치	-	E.L 및 좌표측량		북단 6개소 남단 37개소
	접속교,램프교	-	신축이음부 상면 E.L 및 좌표측량		43개소
	남․북 접속교	-	도로 현황측량 (강면북로, 올림픽도로, 한강 고수부지) 성산대교를 교차하는 도로 교량의 높이 확인		남단 52,000㎡ 북단 46,000㎡ 계 98,000㎡
측 량 추가물량	- 중심선측량 : 0.72km - 종단측량 : 0.72km - 횡단측량 : 0.32km(감소)			- 현황측량 : 98,000㎡ - EL. 및 좌표측량 : 194개소 ※ 선박지원 필요(약 4일)

○ 측량 추가소요예산 : 28,600천원(지형측량, EL 및 좌표측량 추가물량)

※ 기존 과업에 포함된 중심선측량, 종․횡단 추가물량 제외

□ 조치사항

○ 용역사에서 보고한 추가 측량실시계획서 검토결과 적정하므로 승인 통보하여 추가 측량을 실시 용역수행 업무에 참고코자 하며

○ 추가 측량에 소요되는 비용(약 28,600천원)은 향후 설계변경시 반영코자 함

붙 임 : 추가 측량계획서 1부.  끝.