과 장		07/10 이석재	심사자	오재섭		설계자	최진규		설 계	심 사		결 재
									2014년 7월 일	2014년 7월 일
변 경 설 계 서(1회)
	공 사 (용역) 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)-북부
	구 분				당초금액			변경금액			비 고
	총 공 사 비				275,944,780			300,000,000			증)24,055,220
	도급비	공 급 가 액			165,404,346			205,000,000			증)39,595,654
		부 가 가 치 세			16,540,434			20,500,000			증) 3,959,566
		계			181,944,780			225,500,000			증)43,555,220
	관 급 비				44,000,000			64,500,000			증)20,500,000
	이 전 비				50,000,000			10,000,000			감)40,000,000
공사(용역)개요 - 당초 : 화강석 포장보수 300㎡, 석재포장 절단 400m - 변경 : 화강석포장보수 400㎡, 석재포장 절단 600m 바닥청소 6,000㎡, 기존자재 재활용 60㎡