과 장		07/10 이석재	심사자	오재섭		설계자	최진규		설 계	심 사		결 재
									2014년 7월 일	2014년 7월 일
변 경 설 계 서(1회)
	공 사 (용역) 명 : 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-북부
	구 분				당초금액			변경금액			비 고
	총 공 사 비				1,104,239,650			1,104,239,650			-
	도급비	공 급 가 액			519,854,228			670,172,410			증)150,318,182
		부 가 가 치 세			51,985,422			67,017,240			증) 15,031,818
		계			571,839,650			737,189,650			증)165,350,000
	관 급 비				512,400,000			347,050,000			감)165,350,000
	이 전 비				20,000,000			20,000,000			-
공사(용역)개요 - 당초 : 소규모 포장복구 37a - 변경 : 소규모 포장복구 74a 절삭 덧씌우기 245a 절삭 덧씌우기 74.3a 긴급소파보수(출동, 대기) 290hr 긴급소파보수(출동, 대기) 380hr