다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시 동부도로사업소장(교량보수과장)
(경유)
제목	잠실철교 보수공사 추가소요 예산 요청에 대한 회신

1. 동부도로사업소 교량보수과-2697(2014.7.7.)호와 관련입니다.

2.위 대호와 관련 귀 사업소에서 요청한 잠실철교(도로교) 보수공사를 위하여 2014년 예산외 사업비 추가요청한 사항에 대하여 아래와 같이 회신하니,

시설물 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항

○ 2014년 본예산 : 880백만원

○ 추가 사업비   :   78백만원

○ 사업비 증가요인 : 하류측 도장 전면 완료를 위한 잔여 물량 시행

나. 검토의견

○ 잠실철교 보수공사 예산은 잠실철교 보수를 위해 단위사업으로 편성된 예산으로 보수공사는 원칙적으로 예산 범위내에서 시행하여야 하며,

○ 보수공사 시행중 설계변경 등의 요인으로 보수공사 예산이 증액이 불가피한 경우, 공사의 시급성을 고려 사업규모 조정 등을 통해 공사시행 방안을 강구하여야 할 것이고, 구조물의 안전등을 위해 불가피한 경우도 이를 최소 한도로 하여 주시기 바람. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	전봉재		한강교량팀장	하현석		도로시설과장	07/10 이용심
협조자
시행	도로시설과-12217	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동 1층 도로시설과	/
전화	02-2133-1684	/전송	02-2133-1078	/		/	대시민공개