투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	풋살경기장 전기공사 설계변경 시행

『풋살경기장 전기공사』 시행 중 물량 변경 및 추가 공종 발생으로 인한 변경사항이 있어 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 풋살경기장 전기공사

2. 도 급 자 : (주)상지일렉스 대표 정원상

3. 공사기간 : 2014. 5.19 ~ 7.17

4. 설계변경 사유 : 물량 변경 및 추가공종 발생, 보험료 정산

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	29,991,250	30,052,000	증 60,750
도 급 비	29,991,250	30,052,000	증 60,750
관 급 비	-	-	-

6. 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업, 잠실종합운동장 시설 개보수

시설비및부대비, 시설비

첨부  1. 변경설계서 1부

2. 설계변경보고서 1부. 끝.

주무관	김기탁		주무관	이정원		시설개선과장	07/10 신동호
협조자	주무관	박관현		주무관	권수식
시행	시설개선과-4542	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울시 송파구 올림픽로 25(잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8839	/전송	02-2240-8777	/	lewepn@seoul.go.kr	/	대시민공개