문서번호	도시철도계획부-3000
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공정관리과장	도시철도계획부장	도시철도국장
이덕배	김두주	代김진팔	07/10 김준기
협 조

- 지하철 9호선 2단계 건설공사 -

통합 공정회의 개최 결과 보고

2014. 07.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『지하철 9호선 2단계 건설공사』

통합 공정회의 개최 결과 보고

지하철 9호선 2단계 건설사업의 효율적인 관리와 원할한 사업추진을 위하여 월간 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2014. 7. 9(수) 15:00 ~ 16:30

○ 장    소 : 도시철도 3층 공용회의실

○ 참 석 자 : 총 20명(도시철도국장, 부장, 담당과장, 공사관리관)

* 9호선 2단계 915~917공구 토목, 건축, 설비 등 분야별 관계자

□ 회의결과

○ 주요 회의내용

- 공사관리관 현안사항 및 공정관리 보고

- 지장물, 민원발생 등 공정 만회대책 의견 교환

- 분야별 사업추진에 따른 협조사항 등

○ 공구별 공정 및 현안사항

- 915공구(계획/실적, 92.38/90.9%)

· 출입구, 환기구, 피난계단은 7월말 완료 예정(#8 출입구는 9월 첫째주 완료)

· #3 출입구 지장물(상수도, 도시가스) 이설 지연으로 유관기관과 협의 중임

· 차병원 사거리 도로복구 단계별 교통처리 축소 방안 협의 중(서울지방경찰청)

· 수위감지 경보 시스템 2개소 설치(925E2 환기구 및 #7 출입구)

· 외부출입구 및 E/S, E/V는 늦어도 9월말까지 완료후 건축 인계 필요

(건축 외부공사에 필요한 최소 공기는 3개월임)

· 건축 자재업체 납품 중단 우려(자재대금 납품 즉시 요구-경남기업 워크아웃)

- 916공구(계획/실적, 93.25/91.54%)

· 잔여 공종으로 환기구 7개소의 상부 복공부분, 929정거장 #2,3 출입구 상부    2~3m만 남았음.

· 928정거장 #2 출입구 광역상수도 저촉으로 출입구 변경 설치(9월 완료 예정)

· 929정거장 #3 출입구 광역상수도 이설 재협의 중(상수도사업본부)

· 코엑스 연결통로는 현재 2단 버팀보 시공중으로 내년 2월 완료 예정.

· 상수도 누수 침수피해 양수작업 완료하고 토공 작업 중임.

· 지하수 전용관로 부설에 따른 강남구 하수관거 부설과 병행 시공 협의

· 수위감지 경보 시스템 6개소 설치(928 정거장 2개소, 929정거장 4개소)

· 929정거장 침수피해로 승강장 바닥석재 재시공(7월 철거, 8월 재시공)

- 917공구(계획/실적, 95.14/91.82%)

· 본선 환기구 구조물 완료, 토공 및 복공판, 주형보 해체 중(8월 중 완료 예정)

· 930정거장 환기구 및 피난계단 8월 중 완료 예정(시점 환기덕트는 10월말)

· 930정거장 외부출입구 7월말 완료 예정

· 환승통로 8월말 완료하여 9월 20경 인계 예정

· 지하수 재활용 처리방안(자연배수 또는 강제배수) 검토(설계 미반영)

- 시스템 분야(계획/실적, 98.91/98.51%)

· 시운전 결과 문제점 없음.

· 현재 시운전은 중요지점 연동시험을 시행하고 있음

○ 국장 지시사항

- 토목분야 잔여공정(출입구, 환기구, 피난계단)에 대한 공정표 작성

(종,평면도 및 공종별 추진일정 등) 별도 보고 요함.

- 분야별 후속 공정에 지장 없도록 토목공정 만회 및 인계 철저

- 수해 등 현장 침수피해 없도록 특단의 대책수립 및 시행할 것.

· 취약지점은 사전 준비 철저

· 취약시간대(야간 및 휴일) 집중 관리 필요(비상근무자 야간 순찰 등 철저)

- 현장 애로사항 등은 즉시 보고하여 주기 바람.

□ 향후계획

○ 각 부서 및 현장에서는 지시사항과 분야별 협조사항을 이행.

○ 다음 공정회의(‘14.8.6. 15:00) 개최(일정은 다소 변경될 수 있음)

붙임 : 공정회의 보고자료 및 사진 각 1부.  끝.