문서번호	토목부-13301
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
김구		07/10 노우성
협조
	주무관		양준식

- 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 -

주암교(수서)부근 임시통행 보도정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

주암교(수서) 부근 임시통행 보도정비 보고

서초구청에서 요청한 주암교(수서) 부근 LH서초보금자리주택 입주자들의 보행불편 민원에 대해 작업지시하고 설계변경에 반영처리하고자 보고드림

관련근거

❍ 서초구 토목과-1580(`14.2.4.) 양재도로상 주암교 주변 현장점검 민원사항 처리 협조

❍ 업무연락전 SMIH-14-17369(`14.2.14.) 서초구청 민원처리를 위한 업무 지시

❍ 동기강 2014-131호(`14.6.26.) 주암교 부근 임시통행 보도정비공사 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13.5.9.~`14.9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1,   ❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

보고내용

❍ 민원내용(서초구)

- 서초보금자리아파트 5단지~주암교 방향 보행자 통행로 con`c포장

- 양재천 산책로 경사로에 계단설치

- 주암교 상 노후 및 파손된 보도 정비

❍ 현황사진

❍ 정비내용

연번	서초구 민원사항	반영사항	비 고
1	비포장도로 콘크리트포장	콘크리트 포장 (B=2.0m, L=15m)
2	경사로 계단설치	콘크리트 계단 설치 (B=1.2m, L=11m)
3	주암교내 파손된 보도정비	보도블록 정비 (B=1.0m, L=68m)

❍ 공사비 증･감 현황                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1. 콘크리트포장	-	315	315
2. 경사로 계단설치	-	679	679
3. 보도정비	-	477	477
4. 직접공사비	-	1,471	1,471
5. 제경비	-	369	369
총공사비	-	1,840	1,840

조치계획

❍ 감리단 검토의견에 따라 민원해결을 위한 사항으로 추후 설계 변경하여 도급비에 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.