투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 2회(염천교 보수보강 및 강구조구간 재설치공사)

1. 우리 사업소에서 시행중인 「염천교 보수보강 및 강구조구간 재설치공사」와 관련하여 준공기한(2회)을 아래와 같이 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 염천교 보수보강 및 강구조구간 재설치공사

나. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2013. 8. 13 ~ 2014. 7. 12

- 변 경 : 2013. 8. 13 ~ 2014. 7. 31

다. 준공기한 연기에 따른 귀책 소재 : 서부도로사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 준공기한 연기사유

- 현장 여건변경에 따른 세부계획 수립을 위한 기간 소요로 잔여공종 절대공기 부족

붙  임 :  1. 관련 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	07/10 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5317	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개