문서번호	설비부-7533
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	07/11 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고(2차)

(윤극영 반달할아버지 집 리모델링 전기공사)

2014.  7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

준공기한 연기 검토 보고(2차)

(윤극영 반달할아버지 집 리모델링 전기공사)

윤극영 반달할아버지 집 리모델링 전기공사 관련, 선행공종(건축) 지연에 따른 전기공사 준공기한(2차) 연기 신청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

관련공문

□ 시공사 실정보고

- 준공기한 연기 신청[파일(반달) 2014-007(2014.07.11)]

공사개요

□ 공 사 명 : 윤극영 반달할아버지 집 리모델링 전기공사

□ 공사내용 : 옥외보안등, 전등, 전열, 통신 기타 1식 등

□ 공사기간 : 2014. 4. 24 ~ 7. 15

□ 공 사 비 : 37,218,400원

□ 공사업체 : ㈜화일이엔에프

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

공 종	당 초	변 경	비 고
전기공사	2014.4.24. ~ 2014.7.15	2014.4.24. ~ 2014.7.31

□ 공사금액 : 변경없음

□ 연기사유 : 선행공종(건축) 지연에 따른 후속공종 연기

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 선행공정(건축) 지연으로 기구 부착(전등, 전열콘센트, 전화) 등 후속공정을 진행할 수 없어 준공기한 연기가 불가피 함.

□ 준공기한 연기에 대한 실정보고 내용이 타당하므로 준공기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기의뢰 코자 함.

따로붙임 : 관련공문 및 합의서 1부.  끝.